2022년

문화재수리 표준품셈 일부 개정(안)

2022. 6. 1.

Ⅰ		개정 개요

ㅇ 항목 신설 : 4공종 19항목(목공사 2, 미장공사 3, 단청공사 12, 기타공사 2)

ㅇ 항목 조정 : 4공종 8항목(목공사 1, 지붕공사 5, 미장공사 1, 온돌공사 1)

ㅇ 오기 수정 : 1공종 1항목(석공사 1)

공종	구분	항목명	변동사항	개정사유
목공사	조정	4-28 기둥동바리이음 4-28-1 주먹장이음(원기둥) 4-28-2 주먹장이음(각기둥)	항목 세분화, 품 조정	- 기존 기둥동바리이음 항목을 원기둥, 각기둥으로 구분 * 원기둥과 각기둥의 품 차이 발생, 주먹장이음 명시
	신설	4-28-3 엇걸이산지이음(원기둥)	신설	- 기존 동바리이음 품셈은 주먹장이음을 기준으로 산출되어 엇걸이산지이음 시공 시 품 차이 발생
		4-28-4 엇걸이산지이음(각기둥)
지붕공사	조정	5-3 산자엮기	산자쪼개기 품 추가	- 기존 산자엮기 시 장작산자의 경우 제재소에서 생산 * 인력으로 원목을 쪼개어 산자를 생산함으로써 산자의 섬유질을 살려 진새 부착력 증대 및 원형 기법 전승
		5-8 마루기와이기(3겹)	유사항목 통합, 재료량 조정(정미량)	- 마루기와이기 항목 통합으로 가독성 확보 - 3겹이기의 암키와 수량 오류 조정(정미량) - 기와 재료할증 포함 문구 삭제(별도 할증 적용 중)
		5-9 마루기와이기(5겹)
		5-10 마루기와이기(7겹)
		5-11 마루기와이기(9겹)
		5-9 ~ 5-31 항목번호	항목번호 수정	- 마루기와이기 항목 통합으로 항목번호 재정렬
미장공사	조정	7-11 양성바르기	재료량 및 기준 수정(재벌)	- 양성바르기 시 재벌 바름 기준 및 재료량 누락 * 초벌, 재벌, 정벌로 양성 바름 기준 명시
	신설	7-18 포벽해체	신설	- 포벽 해체 및 바르기 품 누락 * 일반 벽체와 포벽의 시공 품 차이 발생
		7-19 포벽바르기 7-19-1 포회벽바르기	신설
		7-19-2 포재사벽바르기	신설
온돌공사	조정	9-0 적용기준	소규모공사 산정 기준	- 온돌공사의 항목별 수량산출 기준이 달라 소규모 적용기준을 온돌해체 또는 설치 수량을 기준으로 명시 * 항목별 수량산출 기준이 달라 소규모공사 산출 기준 모호
석공사	수정	4 산출기준	붙임 참고	수식 오류에 따른 정정
단청공사	신설	13-21 석간주가칠(전통소재단청)	전통소재단청 신설	- 전통안료를 사용하여 단청공사를 수행할 시 현대화학안료와 품의 차이가 큼 * 전통안료를 사용한 전통소재단청을 활성화 하여 전통재료의 진흥·보급 도모 - 또한, 단청공사 시 소모되는 재료량에 대한 기준 제시
		13-22 뇌록가칠(전통소재단청)
		13-23 뇌록가칠-창호(전통소재단청)
		13-24 먹긋기(전통소재단청) 13-24-1 먹긋기(먹/분)
		13-24-2 먹긋기(먹/분+변)
		13-25 색긋기(전통소재단청) 13-25-1 색긋기(2빛)
		13-25-2 색긋기(3빛)
		13-26 모로단청(전통소재단청)
		13-27 금모로단청(전통소재단청)
		13-28 금단청(전통소재단청)
		13-29 별화(전통소재단청) 13-29-1 단순
		13-29-2 복잡
기타공사	신설	15-15 담장속채움해체	신설	- 담장공사 시 속채움의 해체·설치에 대한 품 누락
		15-16 담장속채움

- 개정(안) -

구 분

당    초

개    정

비    고

제4장 목공사

조정

4-28 기둥동바리이음

(개소당)

구분		규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료		인력품의 5%	인인인인식	0.4 0.12 0.32 0.38 1
[주]	① 본 품은 기둥이 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고 새로 제작한 기둥(동바리)을 이음할 때를 기준으로 한 것이다. ② 기둥(동바리)이음은 주먹장이음을 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 기둥(동바리) 재료와 치목품은 별도 계상한다. ⑤ 잡재료는 별도 계상한다

4-28 기둥동바리이음

4-28-1 주먹장이음(원기둥)

(개소당)

구분		규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료		인력품의 5%	인인인인식	0.82 0.37 0.32 0.59 1
[주]	① 본 품은 기둥을 드잡이하면서 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고, 신재로 치목한 기둥(동바리)을 이음할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 치목품이 포함되어 있다. ③ 본 품은 원형제재목을 사용하여 이음할 때를 기준으로 한 것으로, 원목(原木)을 사용할 경우 치목품은 ‘4-5 4각치목’, ‘4-6 8각치목’, ‘4-7 16각치목’ 에 따른다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다. ⑥ 장부 홈파기는 1개소당 한식목공 0.18인을 가산한다. ⑦ 잡재료는 별도 계상한다.

4-28-2 주먹장이음(각기둥)

(개소당)

구분		규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 드잡이공 보통인부 공구손료		인력품의 5%	인인인인식	0.73 0.32 0.32 0.55 1
[주]	① 본 품은 기둥을 드잡이하면서 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고, 신재로 치목한 기둥(동바리)을 이음할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 치목품이 포함되어 있다. ③ 본 품은 4각제재목을 사용하여 이음할 때를 기준으로 한 것으로, 원목(原木)을 사용할 경우 치목품은 ‘4-5 4각치목’에 따른다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다. ⑥ 장부 홈파기는 1개소당 한식목공 0.18인을 가산한다. ⑦ 잡재료는 별도 계상한다.

*기존 동바리이음항목(주먹장) 원기둥, 각기둥 구분

*기존품에 원기둥(동바리)치목품 추가

*기존품에 각기둥(동바리)치목품 추가

신설

신 설 -

4-28-3 엇걸이산지이음(원기둥)

(개소당)

구분		규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료		인력품의 5%	인인인식	1.01 0.61 0.51 1
[주]	① 본 품은 원기둥이 해체된 상태에서 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고, 신재로 치목한 기둥(동바리)을 이음할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 치목품이 포함되어 있다. ③ 본 품은 원형제재목을 사용하여 이음할 때를 기준으로 한 것으로, 원목(原木)을 사용할 경우 치목품은 ‘4-5 4각치목’, ‘4-6 8각치목’, ‘4-7 16각치목’ 에 따른다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다. ⑥ 장부 홈파기는 1개소당 한식목공 0.18인을 가산한다. ⑦ 드잡이는 필요시 별도 계상한다. ⑧ 잡재료는 별도 계상한다.

*동바리이음(엇걸이산지이음) 항목신설

-원기둥, 각기둥

신설

신 설 -

4-28-4 엇걸이산지이음(각기둥)

(개소당)

구분		규격	단위	수량	비고
한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료		인력품의 5%	인인인식	0.83 0.50 0.42 1
[주]	① 본 품은 각기둥이 해체된 상태에서 부식되거나 파손된 부분을 잘라내고, 신재로 치목한 기둥(동바리)을 이음할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 치목품이 포함되어 있다. ③ 본 품은 4각제재목을 사용하여 이음할 때를 기준으로 한 것으로, 원목(原木)을 사용할 경우 치목품은 ‘4-5 4각치목’에 따른다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 기둥(동바리) 재료는 별도 계상한다. ⑥ 장부 홈파기는 1개소당 한식목공 0.18인을 가산한다. ⑦ 드잡이는 필요시 별도 계상한다. ⑧ 잡재료는 별도 계상한다.

*동바리이음(엇걸이산지이음) 항목신설

-원기둥, 각기둥

제5장 지붕공사

조정

5-3 산자엮기

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
산자 새끼 한식목공 한식목공조공 보통인부 공구손료		두께 30㎜ ∅7.5㎜, 1타 65m 인력품의 3%	㎥ m 인 인 인 식	0.03 4.55 0.02 0.02 0.07 1
[주]	본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

5-3 산자엮기

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

산자

새끼

한식목공

한식목공조공

보통인부

공구손료

두께 30㎜

∅7.5㎜, 1타 65m

인력품의 3%

㎥

m

인

인

인

식

0.03

4.55

0.02

0.02

0.07

1

[주]

① 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다.

② 현장에서 인력으로 원목을 쪼개어 산자로 사용할 경우 아래 품을 가산한다.

(㎡당)

구분	규격	단위	수량	비고
원목 보통인부	일반재	㎥ 인	0.04 0.23

※ 재료량은 할증이 포함된 것이다.

※ 쪼갠나무산자 제작에 소요되는 품 및 재료 가산 시 산자엮기의 산자 재료량은 계상하지 아니한다.

*쪼갠나무산자 제작 품 신설

- 현장에서 인력으로 원목을 쪼개어 산자를 생산함으로써 산자의 섬유질을 살려 진새 부착력 증대 및 원형 기법 전승

조정

5-8 마루기와이기(3겹)

(m당)

구분	규격	단위	수량	비고
암키와 수키와 착고기와 진흙 생석회 마사토 한식와공 한식와공조공 보통인부 공구손료	중와 대와 중와 대와 중와 대와 인력품의 3%	매 매 매 매 매 매 ㎥ ㎏ ㎥ 인 인 인 식	9.92 9.16 3.33 3.03 6.66 6.06 0.054 4.68 0.018 0.04 0.12 0.20 1
[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ④ 부고이기를 하는 경우에는 1m당 진흙 0.043㎥, 생석회 3.74㎏, 마사토 0.014㎥, 수키와 중와 6.59매, 대와 6매, 한식와공 0.02인을 별도 가산한다. ⑤ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다. ⑥ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.

5-8 마루기와이기

(m당)

구분

규격

단위

수량

비고

3겹

5겹

7겹

9겹

한식와공

한식와공조공

보통인부

공구손료

인력품의 5%

인인인식

0.04

0.12

0.20

1

0.05

0.15

0.25

1

0.06

0.16

0.27

1

0.08

0.21

0.36

1

[주]

① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 숫마루장이기, 풍잠바르기 품이 포함되어 있다.

② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.

③ 부고이기를 하는 경우 아래 품 및 재료량을 가산한다.

(m당)

구분	단위	수량
한식와공	인	0.02

④ 풍잠바르기 재료량은 1㎥당 생석회 550㎏, 백시멘트 110㎏, 모래 0.59㎥을 별도 가산한다.

⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.

⑥ 9겹 이상일 때에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부 품을 각각 25%씩 별도 가산한다.

⑦ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(m당)

구분		단위	수량
			3겹	5겹	7겹	9겹	부고이기
암키와	중와	매	8.34	13.89	19.44	25.00	-
	대와	매	7.70	12.82	17.95	23.07	-
수키와	중와	매	3.33				6.59
	대와	매	3.03				6
착고기와	중와	매	6.66				-
	대와	매	6.06				-
진흙		㎥	0.054		0.059		0.043
생석회		㎏	4.68		5.07		3.74
마사토		㎥	0.018		0.02		0.014

※ 진흙, 생석회, 마사토의 재료량은 할증이 포함된 것이다.

*유사항목 통합
(3겹,5겹,7겹,9겹)

*기와 재료할증 포함 삭제

*부고이기 가산 설명 조정(가독성)

*재료량 별도 제공
(정미량)

*암기와 수량 조정

암키와

폭, 길이, 두께

중와 300×360×21

대와 330×390×24

암키와 중와 정미량

1/0.36*3 = 8.34

암키와 대와 정미량

1/0.39*3 = 7.70

항목번호조정

5-8 마루기와이기(3겹)

5-9 마루기와이기(5겹)

5-10 마루기와이기(7겹)

5-11 마루기와이기(9겹)

5-12 담장기와이기

⋮

5-31 담장기와해체

5-8 마루기와이기

5-9 담장기와이기

5-10 와구토바르기

5-11 기와고르기

5-12 장식기와설치(용두)

⋮

5-28 담장기와해체

* 유사항목 통합으로 항목번호 재정렬

제7장 미장공사

7-11 양성바르기

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
진흙 여물			㎥ ㎏	0.02 0.5	초벌
생석회 모래 풀			㎏ ㎥ ㎏	15 0.01 0.2	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		인력품의 3%	인인인식	0.25 0.2 0.13 1
[주]	① 본 품은 한식기와지붕의 마루기와(용마루, 추녀마루, 내림마루)를 진흙으로 초벌바르기 후 회벽으로 정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 풀은 해초풀 등을 사용한다. ③ 바르기두께는 초벌 10㎜, 정벌3㎜를 기준으로 한 것이며, 바르기두께가 기준 이상일 경우에는 비빔품을 별도 가산한다. ④ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ⑤ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑥ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑦ 처마높이 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다. ⑧ 지붕구배가 30° 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다. ⑨ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

7-11 양성바르기

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
진흙 여물			㎥ ㎏	0.02 0.5	초벌
진흙 모래 여물			㎥ ㎥ ㎏	0.015 0.004 0.043	재벌
생석회 모래 풀			㎏ ㎥ ㎏	15 0.01 0.2	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		인력품의 3%	인인인식	0.25 0.2 0.13 1
[주]	① 본 품은 한식기와지붕의 마루기와(용마루, 추녀마루, 내림마루)를 초벌바르기, 재벌바르기를 한 후 회벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 초벌 10㎜ 내외, 재벌 5㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외를 기준으로 한 것이며, 바름두께가 기준 이상일 경우에는 비빔품을 별도 가산한다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)는 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑥ 처마높이 3.6m 이상∼6.0m 이하일 경우에는 인력품을 15% 가산하고, 6.0m를 초과할 경우에는 매 3.0m마다 각각 10%씩 가산한다. ⑦ 지붕구배가 30° 이상일 때는 인력품을 30% 가산한다. ⑧ 비계매기는 필요시 별도 계상한다.

*재벌바르기 재료량 추가(재벌바르기 기준)

*양성바르기 작업기준 수정

*시방내용 삭제

*바름두께 수정

신설

신 설 -

7-18 포벽해체

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		인력품의 3%	인인인식	0.23 0.12 0.12 1
[주]	① 본 품은 정벌바름해체, 재벌바름해체, 초벌바름해체, 외엮기해체 후 해체한 재료 운반 및 정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 비계매기는 필요 시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ④ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다. ⑤ 잡재료는 별도로 계상한다.

*포벽해체 항목신설

신설

신 설 -

7-19 포벽바르기

7-19-1 포회벽바르기

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
중깃 가시새 힘살 눌외 설외 새끼		Ø6～9㎜	m m m m m m	1.42 1.35 1.16 10.33 3.08 14.81	외엮기
진흙 여물			㎥ ㎏	0.032 0.384	초벌
진흙 모래 여물			㎥ ㎥ ㎏	0.015 0.004 0.041	재벌
생석회 여물 풀			㎏ ㎏ ㎏	2.7 0.09 0.126	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		인력품의 3%	인인인식	1.13 0.86 0.31 1
[주]	① 본 품은 포벽의 외엮기, 초벌바르기, 재벌바르기, 회벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 초벌 90㎜ 내외, 재벌 8㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑥ 비계매기는 필요 시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑦ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

*포벽바르기(회벽, 재사벽) 항목신설

신설

신 설 -

7-19-2 포재사벽바르기

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
중깃 가시새 힘살 눌외 설외 새끼		Ø6～9㎜	m m m m m m	1.42 1.35 1.16 10.33 3.08 14.81	외엮기
진흙 여물			㎥ ㎏	0.032 0.384	초벌
진흙 모래 여물			㎥ ㎥ ㎏	0.015 0.004 0.041	재벌
진흙 생석회 모래 풀			㎏ ㎏ ㎏ ㎏	0.006 4.05 0.003 0.126	정벌
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		인력품의 3%	인인인식	1.03 0.96 0.31 1
[주]	① 본 품은 포벽의 외엮기, 초벌바르기, 재벌바르기, 재사벽정벌바르기 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 바름두께는 초벌 90㎜ 내외, 재벌 8㎜ 내외, 정벌 3㎜ 내외를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ④ 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다. ⑤ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 생석회 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다. ⑥ 비계매기는 필요 시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다. ⑦ 보양에 소요되는 재료 및 품은 “2-7 보양”에 따른다.

제9장 온돌공사

조정

9-0 적용기준

3. 소규모 공사

온돌공사 수량이 20㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

9-0 적용기준

3. 소규모 공사

온돌공사 해체 또는 설치 수량이 20㎡ 이하일 경우에는 인력품을 50% 가산한다. 단, 제1장 적용기준의 소단위공사와 둘 중 하나만을 적용한다.

*온돌공사의 경우항목별 단위기준이 모두 다름. 따라서 온돌해체‧설치 기준으로 소규모 공사 명시

제11장 석공사

4. 산출기준

[주] ② 수량산출기준 도식

㉮ 장초석(사각)：각뿔태 구적공식
상하면을 제한 표면적
S=2×S'×(a+a'), S'=√(a-a')²/4+h²
(a:밑변의 길이, a‘:윗변의 길이, h:높이)

장초석(4각)

㉯ 장초석(팔각)：각뿔태 구적공식
상하면을 제한 표면적
S=4×S'×(a+a'), S'=√(a-a')²/4+h²
(a:밑변의 길이, a':윗변의 길이, h:높이)

장초석(팔각)

4. 산출기준

[주] ② 수량산출기준 도식

㉮ 장초석(사각)：각뿔태 구적공식
상하면을 제외한 표면적 S = 2×[eqn: h']×([eqn: a]+[eqn: a'])

( * [eqn: h']=[eqn: sqrt {{(a-a') ^{2}} over {4} +h ^{2}}])

장초석(4각)

㉯ 장초석(팔각)：각뿔태 구적공식
상하면을 제외한 표면적 S = 4×[eqn: h']×([eqn: a]+[eqn: a'])

( * [eqn: h']=[eqn: sqrt {{(b-b') ^{2}} over {4} +h ^{2}}])

장초석(팔각)

제13장 단청공사

신설

- 신설 -

13-21 석간주가칠(전통소재단청)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.03

0.10

1

[주]

① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다.

② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

③ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
석간주	g	53.47
아교	g	7.45

신설

- 신설 -

13-22 뇌록가칠(전통소재단청)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.02

0.09

1

[주]

① 본 품은 2회 가칠을 기준으로 한 것이다.

② 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

③ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
뇌록	g	36.31
아교	g	6.71

신설

- 신설 -

13-23 뇌록가칠-창호(전통소재단청)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.04

0.90

1

[주]

① 본 품은 아교 혹은 찹쌀풀을 사용하여 창호를 2회 가칠할 때를 기준으로 한 것이다.

② 창호설치 및 해체품은 별도 계상한다.

③ 꽃살, 궁판에 채색을 하는 경우에는 별도 계상한다.

④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
뇌록	g	109.15
백토/패분(호분)	g	53.27
아교/찹쌀	g	12.62

신설

- 신설 -

13-24 먹긋기(전통소재단청)

13-24-1 먹긋기(먹/분)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.06

0.19

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 먹, 호분/연백을 사용하여 먹긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

③ 가칠은 별도 계상한다.

④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
연백/패분(호분)	g	6.77
먹	g	0.70
아교	g	0.81

신설

- 신설 -

13-24-2 먹긋기(먹/분+변)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.08

0.30

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 먹, 호분/연백을 사용하여 먹긋기하고, 추가로 삼록 혹은 황단을 사용하여 변긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

③ 가칠은 별도 계상한다.

④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
석록(삼록)/황단	g	25.77
연백/패분(호분)	g	6.77
먹	g	0.70
아교	g	1.03

신설

- 신설 -

13-25 색긋기(전통소재단청)

13-25-1 색긋기(2빛)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.09

0.43

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 주홍/황단, 육색, 호분/연백을 사용하여 2빛 색긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

③ 가칠은 별도 계상한다.

④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
주사(주홍)/황단	g	26.21
연백/패분(호분)	g	27.07
아교	g	1.67

신설

- 신설 -

13-25-2 색긋기(3빛)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.09

0.64

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 석간주, 주홍/황단, 육색, 호분/연백을 사용하여 3빛 색긋기 할 때를 기준으로 한 것이다.

② 본 품은 2회 긋기를 기준으로 한 것이다.

③ 가칠은 별도 계상한다.

④ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
주사(주홍)/황단	g	28.16
석간주	g	11.82
연백/패분(호분)	g	10.03
아교	g	2.72

신설

- 신설 -

13-26 모로단청(전통소재단청)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.06

1.69

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 모로단청 문양을 2회 채색할 때를 기준으로 한 것이다.

② 가칠은 별도 계상한다.

③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

④ 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
황단(장단)	g	9.19
주사(주홍)	g	6.34
석간주	g	2.79
자황(석황)/황토/등황	g	2.46
석록(삼록)	g	39.55
동록(하엽)	g	14.63
석청(삼청)	g	3.43
석청(대청)	g	2.91
연백/백토/패분(호분)	g	9.61
먹	g	1.27
아교	g	4.26

신설

- 신설 -

13-27 금모로단청(전통소재단청)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.08

2.85

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 금모로단청 문양을 2회 채색할 때를 기준으로 한 것이다.

② 가칠은 별도 계상한다.

③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

④ 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
황단(장단)	g	18.29
주사(주홍)	g	4.91
석간주	g	13.74
자황(석황)/황토/등황	g	4.43
뇌록	g	8.57
석록(삼록)	g	28.29
동록(하엽)	g	19.82
석청(삼청)	g	2.39
석청(대청)	g	1.51
연백/백토/패분(호분)	g	34.05
먹	g	0.82
아교	g	6.48

신설

- 신설 -

13-28 금단청(전통소재단청)

(㎡당)

구분

규격

단위

수량

비고

특수화공

화공

공구손료

인력품의 3%

인인식

0.17

3.29

1

[주]

① 본 품은 바탕가칠 위에 금단청 문양을 2회 채색할 때를 기준으로 한 것이다.

② 가칠은 별도 계상한다.

③ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

④ 타초본만들기품은 “13-4 타초본만들기”에 따른다.

⑤ 재료량은 다음을 참고하여 현장여건에 따라 별도 계상한다.

(㎡당)

안료명(색명)	단위	수량
황단(장단)	g	33.32
주사(주홍)	g	10.90
석간주	g	6.64
자황(석황)/황토/등황	g	1.54
뇌록	g	1.91
석록(삼록)	g	32.50
동록(하엽)	g	31.27
석청(삼청)	g	3.39
석청(대청)	g	2.91
연백/백토/패분(호분)	g	21.63
먹	g	1.48
아교	g	5.02

신설

- 신설 -

13-29 별화(전통소재단청)

13-29-1 단순

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료		인력품의 3%	인식	1.95 1
[주]	① 본 품은 바탕가칠 위에 부재의 전체 부분이나 계풍 등에 동·식물 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료량은 문양에 따라 별도 계상한다. ④ 가칠은 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

신설

- 신설 -

13-29-2 복잡

(㎡당)

구분		규격	단위	수량	비고
특수화공 공구손료		인력품의 3%	인식	3.40 1
[주]	① 본 품은 바탕가칠 위에 부재의 전체 부분이나 계풍 등에 인물·용 등의 그림을 그리는 경우를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 조채, 밑그림, 채색까지를 기준으로 한 것이다. ③ 재료량은 문양에 따라 별도 계상한다. ④ 가칠은 별도 계상한다. ⑤ 비계매기는 필요시 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”에 따른다.

제15장 기타공사

신설

신 설 -

15-15 담장속채움해체

(㎥당)

구분		규격	단위	수량	비고
한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		인력품의 3%	인인인식	0.66 0.27 0.40 1
[주]	① 본 품은 담장해체 시 속채움해체와 해체한 부재의 운반 및 정리를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.

*담장 속채움해체 항목 신설

신설

신 설 -

15-16 담장속채움

(㎥당)

구분		규격	단위	수량	비고
생석회 진흙 채움자갈 잡석 한식미장공 한식미장공조공 보통인부 공구손료		Ø40㎜ 내외 Ø100㎜ 내외 인력품의 3%	㎏ ㎥ ㎥ ㎥ 인 인 인 식	40 0.2 0.25 1 0.22 0.4 0.38 1
[주]	① 본 품은 담장쌓기 시 내부를 잡석, 채움자갈, 진흙 등으로 다지면서 속채움 할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증이 포함되어 있다. ③ 본 품에는 비빔 및 소운반품이 포함되어 있다. ④ 생석회 피우기(소화)를 할 경우 100㎏당 보통인부 0.13인을 가산한다.

*담장 속채움 항목 신설

Ⅱ		개정(안)