신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조[계약보증금] ① “을”은 문화재수리 도급계약을 체결하고자 하는 경우 “갑”으로 하여금 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방법을 선택하여 계약이행의 보증을 하게 하여야 한다. 다만, “갑”과 “을”이 합의에 의하여 계약보증금을 납부하지 아니하기로 약정한 경우에는 연대보증인을 세워야 한다. 1. 계약보증금을 계약금액의 100분의 15이상 납부하는 방법 2. 제3항의 의한 계약이행 보증서는 계약금액의 100분의 40이상을 납부할 것을 보증하는 방법 계약상의 의무이행을 보증하기 위해 계약서에서 정한 계약보증금 ② ~ ③ (생략) ④ “을”은 제19조 내지 제21조의 규정에 의하여 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 제1항 및 제2항의 규정에 따라 추가 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 “갑”은 이에 상응하는 금액의 계약보증금을 “을”에게 반환하여야 한다.	제4조[계약보증금] ① “을”은 문화재수리 도급계약을 체결하고자 하는 경우 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방법을 선택하여 계약이행 보증을 하여야 한다. 다만, “갑”과 “을”이 합의에 의하여 계약보증금을 납부하지 아니하기로 약정한 경우에는 연대보증인을 세워야 한다. 1. ------------------------ ------------------- 2. 제3항에------------------ ------------------------- -------------------- <삭 제> ② ~ ③ (현행과 같음) ④-----제20조 내지 제22조----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제5조[계약보증금의 처리] ① 제31조제1항의 각호의 사유로 계약이 해제 또는 해지된 경우 제4조의 규정에 의하여 납부된 계약보증금은 “갑”에게 귀속한다. 이 경우 계약의 해제 또는 해지에 따른 손해배상액이 계약보증금을 초과한 경우에는 그 초과분에 대한 손해배상을 청구할 수 있다. ② “갑”은 제32조제1항 각호의 사유로 계약이 해제 또는 해지되거나 계약의 이행이 완료된 때에는 제4조의 규정에 의하여 납부된 계약보증금을 지체없이 “을”에게 반환하여야 한다.	제5조[계약보증금의 처리] ① 제32조제1항---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ② --- 제33조제1항------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
제10조[수리기간] ① ~ ② (생략) ③ 완료일은 “을”이 문화재수리를 완성하고 “갑”에게 서면으로 완료검사를 요청한 날을 말한다. 다만, 제24조의 규정에 의하여 완료검사에 합격한 경우에 한 한다.	제10조[수리기간] ① ~ ② (현행과 같음) ② ------------ ------------ -----------------------------------------------제25조-- ----------------------------------
제17조[수리기간의 연장] ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 규정에 의거 수리기간이 연장되는 경우 이에 따르는 현장관리비 등 추가경비는 제21조의 규정을 적용하여 조정한다. ④ (생략)	제17조[수리기간의 연장] ① ~ ② (현행과 같음) ③ ------------------------ ------------------------------------------제22조------ -------------------------- ④ (현행과 같음)
제19조[불가항력에 의한 손해] ① ~ ② (생략) ③ 제2항의 협의가 성립되지 않은 때에는 제38조의 규정에 의한다.	제19조[불가항력에 의한 손해] ① ~ ② (현행과 같음) ③ ------------------------- ----제39조------------
제20조[설계변경으로 인한 계약금액의 조정] ① (생략) ② 제1항의 설계변경으로 인하여 문화재수리 사업량의 증감이 발생한 때에는 다음 각호의 기준에 의하여 계약금액을 조정하며, 필요한 경우 수리기간을 연장하거나 단축한다. 1. 증감된 문화재수리의 단가는 제8조의 규정에 의한 산출내역서상의 단가를 기준으로 상호 협의하여 결정한다. 2 ~ 3 (생략) ③ (생략)	제20조[설계변경으로 인한 계약금액의 조정] ① (현행과 같음) ② ------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ---------------------제9조----------------------- -----------------------------. 2 ~ 3 (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
제21조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] ① 계약체결후 90일 이상 경과한 경우에 잔여 문화재수리에 대하여 산출내역서에 포함되어 있는 품목 또는 비목의 가격 등의 변동으로 인한 등락액이 잔여 문화재수리에 해당하는 계약금액의 100분의3 이상인 때에는 계약금액을 조정한다. 다만, 제16조제1항의 규정에 의한 사유로 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우에는 계약체결일(계약체결후 계약금액을 조정한 경우 그 조정일)부터 90일 이내에도 계약금액을 조정할 수 있다. ② (생략) ③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 계약금액의 조정에 있어서 그 조정금액은 계약금액 중 물가변동기준일 이후에 이행되는 부분의 대가에 적용하되, 물가변동이 있는 날 이전에 이미 계약이행이 완료되어야 할 부분에 대하여는 적용하지 아니한다. 다만, 제16조제1항의 규정에 의한 사유로 계약이행이 지연된 경우에는 그러하지 아니하다. ④ ~ ⑥ (생략)	제21조[물가변동으로 인한 계약금액의 조정] ① ------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제17조제1항----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ② (현행과 같음) ③ ------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제17조 제1항----------------------- --------------------------------- ④ ~ ⑥ (현행과 같음)
제22조[기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정] ① 제19조 및 제20조에 의한 경우 이외에 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 계약금액을 조정하며, 이 경우 증감된 문화재수리에 대한 일반관리비 및 이윤 등은 산출내역서상의 율을 적용한다. ② 제1항과 관련하여 “을”은 제19조 및 제20조에 규정된 계약금액 조정사유 이외에 계약체결후 계약조건의 미숙지 등을 이유로 계약금액의 변경을 요구하거나 문화재수리를 거부할 수 없다.	제22조[기타 계약내용의 변동으로 인한 계약금액의 조정] ① 제20조 및 제21조------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ② ------------------제20조 및 제21조------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
제23조[기성부분금] ① ~ ③ (생략) ④ “갑”이 제3항의 규정에 의한 기성부분금의 지급을 지연하는 경우에는 제25조 제3항의 규정을 준용한다.	제23조[기성부분금] ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ------------------------ ----------------------------제26조제3항----------------
제25조[완료검사] ① “을”은 문화재수리를 완성한 때에는 “갑”에게 통지하여야 하며 “갑”은 통지를 받은 후 지체없이 “을”의 입회하에 검사를 하여야 하며, “갑”이 “을”의 통지를 받은 후 14일 이내에 검사결과를 통지하지 아니한 경우에는 10일이 경과한 날에 검사에 합격한 것으로 본다. 다만, 천재․지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 이를 연장할 수 있다. ② ~ ④ (생략)	제25조[완료검사] ① ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------14일-------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ② ~ ④ (현행과 같음)
제28조[지체상금] ① “을”은 완료기한내에 문화재수리를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서상의 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 ‘지체상금’이라 한다)을 “갑”에게 납부하여야 한다. 다만, “갑”의 귀책사유로 준공검사가 지체된 경우와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 문화재수리가 지체된 경우에는 그 해당일수에 상당하는 지체상금을 지급하지 아니하여도 된다. 1. 제18조에서 규정한 불가항력의 사유에 의한 경우 2.~ 4. (생략) ② 제1항을 적용함에 있어 제23조의 규정에 의하여 “갑”이 문화재수리 목적물의 전부 또는 일부를 사용한 경우에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. ③ “갑”은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 산출된 지체상금은 제25조의 규정에 의하여 “을”에게 지급되는 문화재수리 대금과 상계할 수 있다.	제28조[지체상금] ① ------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 제19조------------------- ---------- 2.~ 4. (현행과 같음) ② -----------------제24조- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ③ ------------------------ ----------------------제26조 ---------------------------------------------------
제29조[하자담보] ① “을”은 문화재수리의 하자보수를 보증하기 위한 하자보수보증금은 계약금액의 100분의 2이상 100분의 1이하를 완료검사후 그 문화재수리의 대가를 지급할 때까지 납부하여야 한다. 하자보수보증금은 제4조 제2항 각호의 보증기관이 발행한 보증서로서 “갑”에게 납부하여야 한다. ② ~ ⑤ (생략)	제29조[하자담보] ① ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제4조제3항 각호의 보증기관이 발행한 보증서로서 “갑”에게 납부하여야 한다. ② ~ ⑤ (생략)
제31조[하도급대금의 직접 지급] ① “갑”은 “을”이 제29조의 규정에 의하여 체결한 하도급계약 중 「문화재수리 등에 관한 법률」에서 정한 바에 따라 하도급대금의 직접 지급사유가 발생하는 경우에는 그 법에 따라 하수급인이 문화재수리한 부분에 해당하는 하도급대금을 하수급인에게 지급한다. ② (생략)	제31조[하도급대금의 직접 지급] ① ---------------제30조---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ② (현행과 같음)
제32조[“갑”의 계약해제 등] ① “갑”은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 1. ~ 2. (생략) 3. 제27조제1항의 규정에 의한 지체상금이 계약보증금 상당액에 도달한 경우로서 계약기간을 연장하여도 문화재수리를 완성할 가능성이 없다고 판단되는 경우 4. (생략) ② (생략) ③ (생략)“을”은 제2항의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지 통지를 받은 때에는 다음 각호의 사항을 이행하여야 한다. 1. (생략) 2. 제12조의 규정에 의한 지급재료의 잔여분과 대여품은 “갑”에게 반환하여야 한다.	제32조[“갑”의 계약해제 등] ① ------------------------ -------------------------------------------------- 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 제28조제1항-------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ ------------------------ ------------------------------------------------------- 1. (현행과 같음) 2. 제13조------------------- --------------------------------
제33조[“을”의 계약해제 등] ① (생략) ② 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 제31조 제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.	제33조[“을”의 계약해제 등] ① (현행과 같음) ② ------------------------ ----------------------제32조제2항과 같은 조 제3항---------
제34조[계약해제시의 처리] ① 제31조 및 제32조의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 때에는 “갑”과 “을”은 지체없이 기성부분의 문화재수리 금액을 정산하여야 한다. ② 제31조 및 제32조의 규정에 의한 계약의 해제 또는 해지로 인하여 손해가 발생한 때에는 상대방에게 그에 대한 배상을 청구할 수 있다	제34조[계약해제시의 처리] ① 제32조 및 제33조----------- ------------------------------------------------------------------------------ ② 제32조 및 제33조----------- --------------------------------------------------------------------------

〈 민간 문화재수리 표준도급계약서 소관 부서명 〉

문화재청 수리기술과
연 락 처	(042) 481 - 4865